Задание на тендер
№Ник02-3.1.1-02.20

Брусника. Организатор Строительства

		  Дата 14.02.2020	Подрядчик		
				наименование	
					
				Ф.И.О.	
ОБЪЕКТ: Никитина 02
ПАКЕТ: Кровля.
ВИД РАБОТ: 3.1.1  Кровля. Кровельный пирог.                           	
Представители	Зона ответственности	Ответственные лица	Контакты	

Заказчик	
Проект, финансирование, потребительское качество	
Руководитель проекта	
Семенюта Александр Николаевич
+7 (913) 487 26 79	

Генподрядчик	
Сроки
ОТ и ТБ
Производственное качество	
Руководитель объекта	
Кисельников Александр 
+7 (923) 241 17 84	
Производственная культура

1.	Требования к сотрудникам Подрядчика:

•	К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):
- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;
- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;
- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.
•	Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;
•	Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки синие, цвет футболки ярко-синий);
•	Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;
•	Курение допускается только в специально отведённых местах;
•	Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;
•	Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося здания запрещено);
•	Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

2.	Требования к охране труда:

•	Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;
•	Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;
•	В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

3.	Требования к механизмам и оборудованию:

•	Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);
•	Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истёк;
•	Применение данного оборудования не ведёт к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);
•	Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;
•	Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

4.	Штрафы:

•	Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Новосибирск». 

5.	Контролирующие лица:

•	Руководитель проекта
•	Руководитель объекта;

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Приложение 1
Задания на тендер
1.	Стоимость работ и  материалов 

														
Предлагаемая стоимость __________________________1 639 746,43_________________________________________
________________________________________________________________________________________
2.	Аванс ___Лимит аванса 30%______________________________________________________________________

3.	Расчёт квадратными метрами_____________________________________________________________________

4.	К оплате работ принимаются законченные конструкции в полном объеме, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. 
5	Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 3 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов, указанной в актах приемки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику в следующем порядке: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Итогового Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ 2,5% от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов; по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ  0,5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов, при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объеме (за исключением, когда Стороны договорились об уменьшении объема работ, о чем было заключено дополнительное соглашение, либо фактический объем работ отличается от объема работ проектного, о чем стороны составили акт), предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.
6	Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Приложение 2
Задания на тендер

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА	
Участники:	Участники:	
1.	Инженер по качеству	(Генподрядчик)	1.	Инженер по качеству	(Генподрядчик)	
2.	Геодезист	(Подрядчик)	2.	Прораб или Технадзор	(Подрядчик)	
3.	Прораб	(Подрядчик)	3.	Авторский надзор	(Проектировщик)	
Состав работ, принимаем:	Принимаем:	
1.	Подготовку основания (очистка).	1.	Поверхность гидроизоляционного ковра.	
2.	Устройство пароизоляции.	2.	Примыкания к вент. шахтам, парапетам, трубам и воронкам.	
3.	Устройство разуклонки.	3.	Исполнительную документацию.	
4.	Устройство теплоизоляции.	4.	Уборку мусора.	
5.	Устройство выравнивающей ц/п стяжки. Устройство аэраторов.	 	 	
6.	Грунтовку стяжки.	 	 	
7.	Устройство нижнего (базового) слоя гидроизоляции.	 	 	
8.	Устройство верхнего (финишного) слоя гидроизоляции.	 	 	 	
9.	Устройство примыкания кровли к конструкциям здания.	•	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика	
10.	Внутренняя приемка выполненных работ	 		
11.	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации.	 		
12.	Уборка мусора.	 		
13.	Мероприятия по выполнению требований, пожарной защиты, ТБ и ОТ.	 		
Критерии приемки:	Критерии приемки:	
1.	Основание прочное, обеспыленное, ровное, без острых граней. (неровности плавного очертания не более 15 мм)	1.	Поверхность кровли без повреждений, чистая, обеспечен качественный сток воды. Полотна гидроизоляции без воздушных пузырей, без складок, без морщин, контроль вытекания битумного валика вдоль шва нахлеста полотнищ  5 - 10 мм	
2.	Пароизоляция  уложена без разрывов сплошным ковром, швы полотенн сплавлены;	2.	Примыкания без повреждений, чистые, край полотна гидроизоляции механически закреплен краевой рейкой по всему примыканию без разрывов, шаг крепежа 200 мм, полотна гидроизоляции без воздушных пузырей, без складок, без морщин.	
•	пароизоляция заходит на высоту не менее 50 мм выше уровня теплоизоляции.	3.	Край гидроизоляции вдоль краевой рейки загерметизирован полиуретановым герметиком поверхность герметика ровная, сглажена вдоль рейки, уклон в сторону кровли, излишки убраны.	
•	пароизоляция наплавлена к основанию на вертикальных поверхностях примыкания.	4.	Допустимые отклонения кровли от проектного уклона	0 - (+ 1) %	
3.	Разуклонка выполнена с проектным уклоном (отклонение 0 - (+ 1) %).	5.	Использована стальная водоприемная воронка	
4.	Теплоизоляция уложена с перевязкой вертикальных швов (не менее  300мм).	6.	На поверхности кровли и вокруг водоприемных воронок отсутствуют скопления воды (лужи) 	
5.	Поверхность выравнивающей стяжки ровная, плотная, прочность соотв. проекту, предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 5 мм разделяющие  поверхность стяжки на участки не более 6×6 м. В примыкании к вертик. констр. выполнен наклонный бортик (<45°, 100х100 мм). Местные неровности на 2-х метровой рейке глубиной не более 4мм, отклонение уклона стяжки от проекта:  0 - (+ 1) %.
Использована стальная водоприемная воронка.	7.	Мусор убран, на кровле отсутствуют посторонние предметы.	
6.	Поверхность выравнивающей стяжки перед грунтованием очищена и обеспылена, грунтование производится на сухую поверхность (влажность не более 4%).	 	 	
7.	Устройство нижнего (базового) слоя гидроизоляции выполняется в соответствии с тех. картой производителя.	 	 	
8.	Устройство верхнего (финишного) слоя гидроизоляции выполняется в соответствии с тех. картой производителя.	 	 	
9.	Места примыкания к вертик. констр. усилены дополнительным слоем гидроизол., край  гидроизоляции механически закреплен к конструкциям здания через краевую рейку и загерметизирован полиуретановым герметиком.	 	 	
10.	Осуществлена внутренняя приемка выполненных работ прорабом (мастером) Подрядчика на предмет соответствия выполненных работ техническим требованиям Генподрядчика, а так же на предмет соответствия составу исполнительной документации.	 	 	 	
11.	Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача исполнительной геодезич. съемки, сдача паспортов и сертификатов.	 	 	 	
12.	Поверхность кровли чистая, мусор отсутствует.	 	 	 	
13.	Наличие средств первичного пожаротушения (огнетушитель порошковый, кошма), опасные зоны ограждены, рабочие имеют СИЗ, имеется приказ на ответственного.	 	 	
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ	
1.	Протекание воды через кровлю.	
2.	Застой воды на поверхности кровли (лужи).	
3.	Наличие вздутий, складок, морщин, разрывов гидро- и пароизоляционных слоев.	
4.	Использование материалов не соответствующих проекту.	
5.	Нарушение требований тех.карт Технониколь.	
6.	Нанесение праймера на основание с влажностью более 4%.	
7.	Уменьшение проектного уклона.	
8.	Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте.	
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.	
•	Акты освидетельствования скрытых работ:	
-	Подготовка основания под пароизоляцию	
-	Устройство пароизоляции кровли	
-	Устройство уклонообразующего слоя  кровли	
-	Устройство теплоизоляции кровли	
-	Устройство выравнивающих армированных стяжек под гидроизоляцию 	
-	Устройство грунтовочного слоя по стяжке (обработка стяжки праймером)	
-	Устройство  гидроизоляции 1 слой.	
-	Устройство  гидроизоляции 2 слой.	
-	Устройство примыканий кровли к парапету и другим вертикальным элементам крыши.	
•	Общий журнал работ, Журнал входного контроля.	
•	Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применяемых при производстве работ;	
•	Акт приемки кровли (с УК)	
•	Исполнительные схемы:	
-	Исполнительная схема выравнивающих армированных стяжек под гидроизоляцию. 	
-	Исполнительная схема Устройство  гидроизоляции 2 слой.	
•	 Протокол испытаний на прочность контрольных образцов растворной смеси (каждая партия).	
•	Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:	
-	Инженеру по качеству Генерального подрядчика.	
-	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.	
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	
1.	Перед выполнением основного объема Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объем;	
2.	При выполнении работ обязательно производить ежедневную уборку кровли.	
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	
1.	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»	
2.	СП 17.13330.2017 (СНиП II-26-76) «Кровли»	
3.	СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»	
4.	СП 50.13330.2012 (ред. СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»	
5.	СП 28.13330.2017  (ред. СНиП 2.03.11-85) Защита строительных конструкций от коррозии»	
6.	СП 72.13330.2016 (СНиП 3.04.03-85) «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»	
7.	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства»	
8.	СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»	
9.	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2», ГОСТ и др.	

ГРАФИК РАБОТ

Приложение 3
Задания на тендер

График работ	
дата начала работ по договору	01.03.2020	
дата окончания работ по договору	-	
Примечание: дата окончания является датой приемки работ