Район работ Анабарское плато – перспективный район на поиски россыпного золота. Проработав результаты работ предшественников, основываясь на собственном опыте работ в данном районе было принято решение о подборе перспективных участков на Анабарском плато. 
ООО РТ в 2024 году получила лицензию на геологическое изучение поиски и разведку месторождения россыпного золота на участке Ченгелех-Верхняя. В 2025 году получено еще три лицензии на три объекта, в 2025 же году собираются документы для подачи заявок еще на две лицензии в том же районе работ.

Для проведения работ на участке Ченгелех-Верхняя необходимо провести 4 этапа работ.
Стоимость всего проекта работ от этапа проектирования до полученияпервой продукции поэтапно составит:
1-2 этап 140 млн.руб.
3-4 этап 110 млн.руб.  
Подробный расчет будет предоставлен в презентации.
1 этап I квартал 2025г составление псд (проектно-сметной документации), квартал 2025г производство рекогносцировочных, полевых работ с проведением геолого-геоморфологических маршрутов с попутным отбором шлихов.   Квартал 2025г проведение лабораторных работ, составление информационного отчета и подача геологической отчетности.
2 этап квартал 2025г закупка оборудования, техники, топлива и стройматериалов и транспортировка их на объект работ Ченгелех-Верхняя. Квартал 2026г производство буровых работ, сборка промывочного прибора, геолого-геоморфологические маршруты с попутным отбором шлихов на объектах Дальняя, Юрях, Малый Юрях. Квартал 2026г лабораторные работы, составление информационного отчета и подача геологической отчетности.
3 этап квартал 2027г подсчет запасов по объекту Ченгелех-Верхняя выход на добычную лицензию, квартал 2027г производство буровых работ по следующим объектам и подготовка их на следующие этапы. Квартал 2027г закупка оборудования, техники и строй материалов на производство добычи и доставка их в п.Хатанга по СевМорпути.
4 этап квартал 2028г добыча полезного ископаемого, квартал 2028г производство бурения на следующих участков участках, подсчет запасов.
В 2025г на объекте работ были проведены геолого-геоморфологические маршруты с шлиховым опробованием. Выявлены шлиховые потоки золота в верхнем течении р. Ченгелех-Россоха и его притоках. В среднем и нижнем течении были отобраны единичные пробы исходя из особенностей аллювиальных отложений. 70% проб отобранных на данном участке содержат золото от единичных знаков до 450мг/м2 , что является хорошим поисковым признаком. Также в среднем течении были обнаружены древние террасы протяженностью до 1,5-2,0км и шириной до 300м которые потенциально могут представлять интерес, но перекрытые озерно-болотными отложениями мощностью до 1,0м и опробование которых ручным способом не представляется возможным, бурение вскроет полную картину отложений и даст прирост по продуктивным пескам возрастет многократно.

На данный момент гарантировано можно говорить о верхнем течении притока р. Ченгелех-Рассоха 5км русла с весовым золотом, ширина русла в среднем составляет 20м, при возможной мощности песков до 1,0м и среднем содержании 0,156мг/м2 .
Цена золота на сегодняшний день 10млн. за кг.
5 000м х 20м х 1,0м =100 000м3 х 0,156м/м2 = 15,600кг х 10 000 000р = 150 600 000р.
Аналогичная ситуация наблюдается и на соседних учасках.
В прогнозных подсчетах на четырех участках общие запасы составят 400кг золота. 

Лаптев В.В.